Author: System Administrator
Company: TACIS CCJ

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 154 din 14 februarie 2008
Planul de acţiuni privind construcţia Portului de pasageri Giurgiuleşti

Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termen de realizare | Responsabili
1 | 2 | 3 | 4
1. | Modificarea Acordului de investiţii „Cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti", în vederea exonerării Investitorului General de obligaţiile asumate vizând construcţia Portului de pasageri Giurgiuleşti | Februarie 2008 | Ministerul Economiei şi Comerţului
2. | Modificarea Contractului între Guvernul Republicii Moldova şi întreprinderea cu capital străin „Danube Logistics" SRL cu privire la locaţiunea terenului | Februarie 2008 | Ministerul Economiei şi Comerţului, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
3. | Examinarea la şedinţa Consiliului de administraţie al întreprinderii de Stat "Portul fluvial Ungheni" a chestiunii privind majorarea capitalului social cu 5 mii. lei şi crearea filialei cu sediul în localitatea Giurgiuleşti, raionul Cahul, precum şi operarea modificărilor respective în documentele de constituire | Februarie 2008 | întreprinderea de Stat „Portul fluvial Ungheni"

4.

înregistrarea la oficiul cadastral teritorial a terenului de 0,5 ha, pe care urmează să fie amplasat Portul de pasageri Giurgiuleşti

Trimestrul I 2008

Întreprinderea de Stat "Portul fluvial Ungheni", 
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru

5.

Obţinerea certificatului de urbanism

Martie 2008

Întreprinderea de Stat "Portul fluvial Ungheni", 
Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului, 
Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor

6.

Elaborarea sarcinii de proiectare şi a studiului de fezabilitate necesare pentru construcţia Portului de pasageri Giurgiuleşti

Martie 2008

Întreprinderea de Stat "Portul fluvial Ungheni",
 Serviciul Standardizare şi Metrologie, 
Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor

7. | Evaluarea impactului asupra mediului înconjurător | Martie 2008 | Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
8. | Organizarea tenderului privind selectarea şi desemnarea companiei (institutului de proiectare),   care   va  elabora  proiectul  pentru  construcţia  Portului  de  pasageri Giurgiuleşti | Aprilie 2008 | Întreprinderea de Stat "Portul fluvial Ungheni"

9.

Coordonarea proiectului priind construcţia Portului de pasageri Giugiuleşti cu Serviciul Grăniceri şi Serviciul Vamal

Aprilie 2008

Întreprinderea de Stat "Portul fluvial Ungheni", 
Serviciul Grăniceri, 
Serviciul Vamal

10. | Organizarea tenderului pentru construcţia şi darea în exploatare a Portului de pasageri Giurgiuleşti | Aprilie 2008 | Întreprinderea de Stat "Portul fluvial Ungheni"
11. | Construcţia Portului de pasageri Giurgiuleşti | Aprilie - mai 2008 | Întreprinderea de Stat "Portul fluvial Ungheni"
12. | Darea în exploatare a Portului de pasageri Giurgiuleşti | Pînă la 1 iunie 2008 | Întreprinderea de Stat "Portul fluvial Ungheni"